□. 특수공시

부천테크노파크 3차사업 추진

○ 테크노파크 1․2차 사업과 연계한 테크노벨트를 구축하여 첨단산업 중심의

산업구조 고도화 추진

□ 사업개요

○ 위    치 : 오정구 삼정동 36-1번지 일원

○ 사업기간 : 2005년 ～ 2007년

○ 사업규모 : 연면적(330,282㎡)

○ 사업내용 : 첨단기업 600여 업체 및 11,000여 일자리 창출

○ 총사업비 : 367,464백만원(시비 17,464, 민간투자금 350,000)

□ 사업진행현황

○ 폐농수로부지 매매계약 체결(부천시↔한국농촌공사)	2005. 08월

○ 공장 설립승인 및 건축허가(분양승인)	2005. 09월

○ 진입도로 및 본공사 착공	2006. 01월

○ 진입도로 및 본공사 준공	2007. 12월

▶ 분양율 : 76.6%

□ 향후 추진계획

○ 미분양 부분(23.4%) 분양실시	분양완료시 까지

추진부서	기업지원과 산업기반조성팀(☎ 320-2257)

【 관련 사진 】

【 부천테크노파크 3차사업 】

한국만화영상산업진흥원 건립

○ 부천만화정보센터, 만화산업종합지원센터, 만화관련 시설을 한곳에 집적화

하는 만화산업 Cluster를 추진하여

○ 만화의 기획․ 제작․전시․판매 등 생산과 유통, 소비가 연계되는 일괄

지원 시스템 구축을 통한 만화영상산업의 국제 경쟁력 향상 도모

□ 사업개요

○ 위    치 : 원미구 상동 529-2번지(영상문화단지 내)

○ 사업기간 : 2004년 ～ 2010년

○ 사업규모 : 부지 26,541㎡ / 건축연면적 23,762㎡(지하2층/지상5층)

○ 총사업비 : 63,100백만원(국비 31,550 도비 12,620 시비 18,930)

□ 사업진행현황

○ 공유재산 관리계획 의결	2004. 03월

○ 입찰안내서 작성 용역	2004. 06월 ～ 09월

○ 총괄분 공사계약 및 실시설계 착수	2005. 12월

○ 실시설계 적격 심의	2006. 07월

○ 건축허가(협의) 및 실시계획 인가	2006. 10월

○ 골조공사 완료	2006. 10월

□ 향후 추진계획

○ 건축외장, 전기설비 공사 완료	2008. 12월

○ 공사 준공	2010. 01월

추진부서	문화산업과 만화산업팀(☎ 320-2686)

【 관련 사진 】

【 한국만화영상산업진흥원 】

해밀도서관 건립

○ 장애인이 비장애인과 함께 하는 복합 문화공간 조성

○ 장애인에 대한 의식을 새롭게 하여 「더불어 사는 복지도시」구현

□ 사업개요

○ 위    치 : 부천시 원미구 중동 1118번지

○ 사업기간 : 2003년 ～ 2007년

○ 사업규모 : 부지면적 1,006㎡, 연면적 3929.87㎡(지하1, 지상5)

○ 사업내용

• 주요시설 : 장애인쉼터, 해밀도서관, 청소년 자료실

○ 총사업비 : 6,788백만원(국비 800  도비 2,000  시비 3,988)

□ 사업진행현황

○ 부천시각장애인복지관 건립계획 수립	2003. 02월

○ 공유재산관리계획 승인	2003. 03월

○ 건축 의뢰	2004. 04월

○ 실시설계 실시	2005. 11월

○ 공사 착공	2006. 07월

○ 공사 준공	2007. 11월

○ 위탁운영자 심의선정	2007. 12월

□ 향후 추진계획

○ 해밀도서관 개관	2008. 06월

추진부서	사회복지과 장애인복지팀(☎ 320-2358)

【 관련 사진 】

【 해밀도서관 】

부천시 노인복지시설 건립 추진

○ 2008년부터 시행예정인 노인장기요양보험법에 대비한 기반시설 확충

○ 중증 노인성질환자의 공공 수발로 의료비 절감 등 사회적 부담 경감

□ 사업개요

○ 위    치 : 부천시 오정구 작동 236번지 일원(여월택비개발사업 지구 내)

○ 사업기간 : 2005년 ～ 2009년

○ 사업규모 : 지하1층, 지상5층, 복합건축물

○ 사업내용

• 주요시설 : 노인전문병원(200병상), 노인전문요양원(100병상)         재가노인지원센터 등

○ 총사업비 : 37,500백만원(국비 1,349  도비 1,063  시비 35,088)

□ 사업진행현황

○ 여월택지개발지구 개발계획 및 실시계획변경승인	2005. 11월

○ 타당성 검토 및 기본계획 용역	2006. 11월

○ 부지매입계약 체결(부천시 ↔ 대한주택공사)	2007. 02월

○ 수탁법인 결정(다니엘 병원)	2007. 08월

○ 노인복지시설 우선시공분 공사계약 및 착공	2007. 12월

□ 향후 추진계획

○ 공사 준공	2009. 08월

○ 노인복지시설 개원	2009. 12월

추진부서	가정복지과 노인복지팀(☎ 320-2356)

【 관련 사진 】

【 부천시 노인복지시설 건립 】

소사대공원 조성

○ 소사구 지역의 대표적 공원으로 조성하여 시민들에게 쾌적하고 편안한

휴식공간을 제공하여 삶의 질 향상에 기여하고, 신구 도심의 균형있는

발전을 도모

□ 사업개요

○ 위    치 : 소사구 소사본동 산53번지 일원

○ 사업기간 : 2002년 ～ 2007년

○ 사업규모 : 39,813.6㎡

○ 사업내용 : 사각정자, 조합놀이대, 벽천분수, 산책로 등

○ 총사업비 : 15,000백만원(국비 1,139  도비 569  시비13,293)

□ 사업진행현황

○ 공원결정 고시	2005. 11월

○ 공원조성 실시설계용역	2006. 06월

○ 실시계획인가 고시	2006. 10월

○ 감정평가 및 토지보상	2006. 6월 ～ 2006. 12월

○ 공사착공	2006. 10월

○ 공사준공	2007. 12월

□ 기대효과

○ 구도심 공원조성으로 지역균형개발 및 시민휴식공간 확충

삶의 질 향상

추진부서	녹지공원과 공원조성팀(☎ 320-2425)

【 관련 사진 】

【 소사대공원 】

오정대공원 조성

○ 구 청사 이전과 연계하여 공원이 부족한 오정구 지역의 중심공원으로

조성하여 구민의 휴양 및 문화 체육공간 제공

□ 사업개요

○ 위    치 : 오정구 오정동 2-1번지 일원

○ 사업기간 : 2001년 ～ 2008년

○ 사업규모 : 49,400㎡

○ 사업내용 : 다목적광장, 자전거박물관, 분수, 산책로, 어린이 놀이 시설 등

○ 총사업비 : 17,500백만원 (시비 17,500)

□ 사업진행현황

○ 도시계획시설(공원) 결정	2005. 11월

○ 실시계획인가 고시	2006. 12월

○ 감정평가 및 토지보상	2006. 12월 ～ 2007. 04월

○ 공원부지내 토사반입	2007. 04월

○ GB 행위허가	2007. 06월

□ 향후 추진계획

○ 공사착공	2008. 03월

○ 공사준공	2008. 12월

추진부서	녹지공원과 공원조성팀(☎ 320-2425)

【 관련 사진 】

【 오정대공원 】

부천 남부역 광장 조성사업

○ 부천북부역 광장의 활성화에 비해 남부역광장 주변은 진입로등의

협소로 인한  교통혼잡 가중 및 보행인의 불편 등으로 지역의

발전을 저해하고 있어 광장을 확장 조성하여 구도심지역 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 위    치 : 소사구 심곡본동 550번지 일원

○ 사업기간 : 2005년 ～ 2008년

○ 사업내용

• 광장조성 : 4,477㎡

○ 총사업비 : 44,068백만원 (국비 832  도비2,788  시비 40,448)

□ 사업진행현황

○ 타당성 및 기본설계용역	2005.08월

○ 도시계획 시설결정 및 지형도면 고시	2005.10월

○ 중앙 투ㆍ융자 심사	2005.10월

○ 도시계획시설 실시계획인가	2006.10월

○ 토지 및 지장물 보상 감정평가	2006.11월

○ 지장건물 철거공사 착공	2007.08월

□ 향후 추진계획

○ 토지보상 및 지장물철거 완료	2008.08월

○ 공사 착공	2008.09월

○ 공사 준공	2008.12월

추진부서	도로과 가로정비팀(☎ 320-2385)

【 관련 사진 】

【 부천 남부역 광장 】

경인로 한전주 지중화사업

○ 부천시의 관문인 경인로를 현대감각에 맞게 재정비 하여

쾌적하고 걷고 싶은 거리로 조성

□ 사업개요

○ 위     치 : 부천시 경인로(유일한로) 서울시계 ~ 인천시계

○ 사업기간 : 2005. 3 ～ 2009. 12

○ 사업규모 : L=6.8km

○ 총사업비 : 20,694백만원(시비 8,658, 한전 12,036)

(단위:km, 백만원)

년도별	구 간	길이	소 요 사 업 비(부담율변경 1/3→1/2)			비고
			계	시부담	한전부담
계	전 구 간	6.8	20,694	8,658	12,036
2005	서울시계~성심고가교	1.8	5,113	1,704	3,409
2007	성심고가교~소명지하차도	1.7	5,019	1,673	3,346
2008	소명지하차도~심곡고가교	1.4	4,236	2,118	2,118
2009	심곡고가교~인천시계	1.9	6,326	3,163	3,163

□ 사업진행현황

○ 간선도로변 한전주 지중화계획 수립	2004. 11월

○ 경인로 한전주 지중화공사 협의	2005. 01월

○ 1차분 공사 준공	2005. 12월

○ 2차분 공사 준공	2007. 03월

□ 향후 추진계획

○ 3차분 공사추진	2008. 07월 ～ 2008. 12월

○ 4차분 공사추진	2009. 04월 ～ 2009. 12월

추진부서	도로과 도로보수팀(☎ 320-2493)

【 관련사진 】

【 경인로 한전주 지중화 사업 - 실시 전 】

【 경인로 한전주 지중화 사업 - 실시 후 】

중동고가교 확장공사

○ 협소 및 노후된 고가교를 확장하여 철도횡단 남북간 교통의           원활한 소통과 도로구조 개선으로 통행안전성 확보 및 주민편익 향상

○  주변 개발사업(중동주공, 대우아파트)에 따른 증가 교통량 소화

□ 사업개요

○ 위    치 : 원미구 중동(부일길) ～ 소사구 송내동(경인국도)

○ 사업기간 : 2005.12월 ～ 2008. 6월

○ 사업규모 : 도로개설 L=530m, B=25m ～ 29.5m

• 교량확장 : 185m,  도로확장 : 345m

• 교량형식 : RPF Beam

○ 총사업비 : 27,000백만원 (도비 5,600  시비 21,400)

□ 사업진행현황

○ 투융자심사(경기도)	2003. 04월

○ 실시설계 용역 착․준공	2004. 08월 ~ 2005. 10월

○ 공사 착공	2005. 12월

○ 신설교량(2차선) 완성	2006 .12월

○ 신설교량으로 교통 우회, 기존교량 철거	2007.01월 ～ 2007.05월

□ 향후 추진계획

○ 공사 준공	2008. 06월

추진부서	도로과 도로시설팀(☎ 320-2490)

【 관련 사진 】

【 중동고가교 확장공사 】

역곡고가교 확장공사

○ 협소하고 및 노후된 고가교를 확장하여 철도횡단 남북간 교통의          원활한 소통과 도로구조 개선으로 교통 편의 제공

○  소사동남로 및 역곡우회도로 개설에 따른 증가 교통량 소화

□ 사업개요

○ 위    치 : 원미구 역곡동(부일길) ～ 소사구 괴안동(동부시장)

○ 사업기간 : 2005.09월 ～ 2008. 05월

○ 사업규모 : 도로개설 L=660m, B=20m ～ 24.5m

• 교량확장 : 75m,  도로확장 : 585m

• 교량형식 : Steel Box형

○ 총사업비 : 22,267백만원 (도비 1,100  시비 21,167)

□ 사업진행현황

○ 투융자심사(경기도)	2002. 09월

○ 용지보상	2004. 03월 ～ 2005. 08월

○ 공사 착공	2005. 09월

□ 향후 추진계획

○ 공사 준공	2008. 05월

추진부서	도로과 도로시설팀(☎ 320-2490)

【 관련 사진 】

【 역곡고가교 확장공사 】

한울빛 도서관 건립

○ 소사권역에 지식정보문화기반시설인 도서관을 건립하여 균등한

지식정보 서비스 혜택 부여

○  시민정보수요에 부응하는 지식정보 및 문화프로그램 제공으로

만족도 향상

□ 사업개요

○ 위    치 : 소사구 소사본동 337-1번지(소사대공원 내)

○ 사업기간 : 2001년 ～ 2008년

○ 사업규모 : 부지(1,500㎡), 건물(3,200㎡), 지하1층 지상3층

○ 사업내용

• 지하층 : 전기실, 기계실, 시청각실 등

• 지상층 : 종합자료실, 열람실, 문화강좌실, 전자정보실, 휴게테크 등

○ 총사업비 : 7,000백만원 (국비 1,400 도비 2,300  시비 3,300)

□ 사업진행현황

○ 투융자심사(경기도)	2001. 06월

○ GB관리계획변경안 심의완료	2005. 04월

○ 기본 및 실시설계	2006. 10월

○ 공사착공	2006 .10월

□ 향후 추진계획

○ 공사 준공	2008. 06월

○ 도서관 개관	2008. 09월

추진부서	시립도서관 운영팀(☎ 320-3923)

【 관련 사진 】

【 한울빛 도서관 건립 】

ITS구축사업 및 교통정보센터 건립

○ 부천시전역을 대상으로 교통정보를 수집 및 모니터링 함으로써

시민에게 실시간으로 교통정보를 제공하고 경찰청, 한국도로공사,

서울,광명,인천과 연계 운영

○ 또한 자가망을 구축하여 교통량 변화에 따른 신호제어, 주차장

안내 및 주차단속시스템을 통해 교통흐름을 개선하고, 노변경고

시스템을 통한 어린이보호구역내 속도저감 유도로 교통안전 도모.

□ ITS 구축사업

□ 사업개요

○ 위    치 : 부천시 주요 가로 및 교차로, 시계(광역)도로

○ 사업기간 : 2006년 ～ 2007년

○ 총 사업비 : 13,000백만원(국비 6,500  시비 6,500)

○ 사업내용

세부시스템	사 업 량
교통정보센터 내부시스템 구축	교통상황판, 센터시스템 1식
무선통신 교통정보수집전달장치(미준공)	OBE, CNS 856개, RSE 33개소
CCTV설치 및 통신망 구축	CCTV 33개소, 광자가통신망 79㎞
교통신호시스템	신흥로 중심 11개교차로
주차안내시스템	4개소
노변경고시스템	20개소
주정차위반단속 시스템	30개소
도로전광표지 시스템(VMS)	5개소

□ 사업진행현황

○ 공사 발주	2006.02월 ～ 2006.3월

○ 계약 및 착수	2006. 06월

○ 공사(부분)준공	2007. 12월

□ 향후 추진계획

○ 무선통신 교통정보수집전달장치	2008. 11월 ～ 2009. 06월

□ 교통정보센터 건립

□ 사업개요

○ 위    치 : 부천시 원미구 중동 1089번지

○ 건축연면적 : 795.5㎡, 지하1층, 지상2층

○ 사업기간 : 2006. 11월 ～ 2007. 7월

○ 총사업비 : 2,100백만원(시비 2,100)

□ 사업진행현황

○ 공사 발주	2006. 11월

○ 공사 착공	2006. 12월

○ 공사 준공	2007. 07월

○ 센터 개관	2007. 12월

추진부서	교통정보센터 기획관리팀(☎ 320-2295)

【 관련사진 】

【 ITS 구축 사업 】

【 관련사진 】

【 교통정보센터 】

서울지하철7호선 연장건설

○ 경인철도 이용승객을 분산하여 경인선 이용 혼잡 완화와 동․서간

도시교통난을 해소하고, 자동차 운행축소에 따른 대기오염도

저하로 쾌적한 도시환경 조성

□ 사업개요

○ 위    치 : 서울 온수역 ～ 부천 중․상동 ~ 인천 부평구청역

○ 사업기간 : 2004. 10월 ～ 2010. 12월

○ 사업규모 : 10.2Km(부천 7.39Km, 서울 0.44Km, 인천 2.37Km)

○ 총사업비 : 1,245,630백만원

▶ 부천시 : 902,334백만원[(국비 541,400(60%), 시비 360,934(40%)]

□ 사업진행현황

○ 예비타당성 조사	2001. 09월

○ 기본계획 및 기본설계 용역	2003. 07월 ～ 2004. 06월

○ 도시철도 기본계획 고시	2004. 06월

○ 실시설계	2004. 12월 ～ 2005. 07월

○ 공사착공	2004. 12월

○ 도시관리계획 시설 결정고시	2005. 08월

○ 사업계획 승인	2006. 09월

○ 토지수용 및 지하사용 토지 보상완료	2007.01월 ～ 2008.07월

□ 향후 추진계획

○ 터널 굴착공사 및 구조물 공사완료	2007.06월 ～ 2009.12월

○ 시운전	2010.09월 ～ 2010.12월

○ 공사완료	2010. 12월

추진부서	도시철도과 행정지원팀(☎ 320-2832)

【 관련사진 】

【 부천시 구간 노선도 】

【 공사 현장 】

굴포천하수처리장 고도처리시설공사

○ 하수처리장 방류수 수질기준이 2008년 1월부터 수지규제강화 및

규제항목이 추가됨에 따라

○ 기 운영중에 있는 하수처리시스템을 고도정화 처리하여 방류수

수질기능 강화 하고자함.

□ 사업개요

○ 위    치 : 부천시 오정구 대장동 434번지(하수처리장 내)

○ 사업기간 : 2003.07월 ～ 2008.12월

○ 사업규모 : 총 고도처리 용량 Q = 90만톤/일

○ 사업내용

• 1단계시설 공정도입 (Q=60만톤/일 - 표준활성슬러지법)

• 2단계시설 공정개선 (Q=30만톤/일 - 4stage BNR)

○ 총사업비 : 57,449백만원

(국비 16,003 도비 7,094 시비 7,098 원인자 27,254)

□ 사업진행현황

○ 기본 및 실시설계용역 시행	2003.7월 ～ 2005.01월

○ 고도처리시설사업 인가	2006.05월

○ 공사계약 및 착공	2006.06월

□ 향후 추진계획

○ 고도처리시설 준공	2008.12월

추진부서	하수과 하수시설팀(☎ 320-2452)

【 관련 사진 】

【 굴포하수처리장 고도처리시설공사 】

삼정처리구역 하수관거 정비공사

○ 삼정천 수계의 하수관거를 체계적으로 정비하여 불명수 유입 차단

으로 유입수질 개선을 통한 하수처리장 운영효율 증대

○ 노후,불량한 하수관거 정비를 통한 저지대 상습침수 예방으로

쾌적한 생활환경 조성

□ 사업개요

○ 위    치 : 삼정천 처리구역 일원 (신흥동, 오정동, 도당동,약대동)

○ 사업기간 : 2004. 12월 ～ 2009. 12월

○ 사업규모 : L= 43.50km, 빗물펌프장 1개소

○ 사업내용 :

• 하수관 신설 : 3.68km

• 하수관 교체 및 보수 : 39.82km

• 빗물펌프장 : 20㎥/분 × 3대, 1개소

○ 총사업비 : 48,567백만원 (국비 31,742, 시비 16,825)

○ 사업방식 : 장기계속공사

□ 사업진행현황

○ 실시설계 용역	2003. 02월 ~ 2004. 05월

○ 사업발주	2004. 09월

○ 공사착공	2004. 11월

○ 주민설명회 개최	2005. 02월 ～ 2005. 03월

○ 사업 추진	2005. 03월 ～ 2007. 12월

□ 향후 추진계획

○ 하수관거 정비	2008. 02월 ～ 12월

○ 사업 최종준공	2009. 10월

추진부서	하수과 하수도팀(☎ 320-2587)