- 2010년 부천시 지방재정공시 -

참     고     자     료

부   천   시

분야별 주요 투자사업 현황

분야	사 업 명	총사업비	담당부서
교육	학교 시설개선 및 교육환경 지원사업	137억원	체육청소년과
체육	오정레포츠센터 건립	420억원	체육청소년과
문화	상동 도서관 건립	95억원	시립도서관
	꿈여울 도서관 건립	63억원	시립도서관
	한국만화영상산업진흥원 건립	628억원	문화산업과
	옹기박물관 건립	88억원	문화예술과
환경	폐기물 전처리시설(MBT) 신출	157억원	청소과
하천	역곡자연하천형 조성공사	142억원	하수과
	삼정천처리구역 오접방지 및 하수관거 정비	492억원	하수과
공원	부천수목원 조성	393억원	농산지원과
	오정대공원 조성	175억원	공원녹지과
복지	부천시 노인복지시설 건립 추진	376억원	가정복지과
도로	계수대로 개설공사	858억원	도로과
	서운~삼정간 연결도로 개설공사	219억원	도로과
	계남큰길(2단계) 확장공사	516억원	도로과
교통	고강동 공영차고지 건립	184억원	교통관리과
	서울지하철7호선 연장건설	7,829억원	도시철도과

오정레포츠센터 건립

2011년 전국체육대회 수중 및 레슬링경기장 경기장으로 활용하고 대회 이후 오정구 지역 내 생활체육 공간으로 활용

□ 사업개요

○ 위    치 : 오정구 오정동 123-1번지 일원

○ 사업기간 : 2005. 3월 ~ 2010. 10월

○ 사업규모 : 부지18,686㎡, 건축연면적 9,884㎡, 지하2/지상2층

○ 사업내용 : 수영장(공인2급), 체육관, 헬스, 에어로빅, 주차장 등

○ 총사업비 : 42,000백만원(국비 3,000 도비 1,500 시비 37,500)

□ 추진현황

○ 2005. 10. : 중기재정계획반영, 도시계획시설결정, 타당성용역

○ 2006. 04. : 지방재정중앙투융자심의

○ 2007. 12. : 실시설계용역 착수(2008. 05.31 용역 완료)

○ 2008. 09. : 지방재정 중앙 투·융자(변경)심의 통과

○ 2008. 09. : 공사계약 심의요청

○ 2009. 01. : 공사발주 의뢰

○ 2009. 03. : 시설공사 착공

○ 2010. 10. : 시설공사 준공(예정)

□ 사업효과

○ 생활체육인들에게 쾌적한 운동시설을 제공함으로써 건강한 스포츠 생활로 삶의 질 향상과 우수한 스포츠인 배출

추진부서	체육청소년과 체육시설팀 (☎ 032-625-2487)

□ 참고자료

○ 연도별 사업비 집행현황(2010. 07. 30. 현재)

(단위: 백만원)

구 분	사 업 비 집 행 내 역					공정률	비고 (채무)
	계	국 비	도 비	시 비	기 타
계	42,000	3,000	1,500	37,500
2007년	36			36		1%
2008년	14,786			14,786		2%
2009년	5,720	2,154	1,077	2,489		13%
2010년	4,338	846	423	3,069		69%
2010년 08월 ~	17,120	-	-	17,120

※ 채무내역 : 지방채 50억원(2009년 11월 2일 발행)

○ 세부 시설물 현황

(단위: ㎡)

구 분	면 적	주요 시설물 현황	비고
계	9,792.17
1층	3,211.69	로비, 헬스, 에어로빅, 체육관
2층	164.36	홀
지하1층	5,262.31	홀, 수영장, 탈의실, 샤워실
지하2층	1,153.81	기계실, 전기실, 발전기실

상동도서관 건립

상동권역에 공공도서관 건립으로 시민수요에 부응하는 지식정보 및 문화프로그램 제공을 위한 독서문화공간을 조성함으로써 균등한 도서관 정보문화 혜택 부여

□ 사업개요

○ 위    치 : 원미구 상동 620-4

○ 사업기간 : 2006년 ~ 2011년

○ 사업규모 : 부지 5,486.3㎡ 연면적 5,317.16㎡

(지하1층, 지상4층)

○ 주요시설 : 종합자료실, 어린이자료실, 전자정보실, 시청각실, 열람실 등

○ 총사업비 : 9,500백만원(국비 1,600  도비 2,400 시비 5,500)

□ 추진현황

○ 2009. 06. : 기본 및 실시설계 완료

○ 2009. 10. : 공사착공

○ 2011. 06. : 공사준공

○ 2011. 09. : 도서관 개관

□ 사업효과

○ 도서관 정보 서비스 소외지역에 정보문화 향유 및 정서 통합 커뮤니티를 위한 정보문화시설 확충하여 시민 삶의 질 향상

추진부서	시립도서관 운영팀(☎ 032-625-4533)

□ 참고자료

○ 연도별 사업비 집행현황(2010. 07. 30. 현재)

(단위: 백만원)

구 분	사 업 비 집 행 내 역					공정률	비고 (채무)
	계	국 비	도 비	시 비	기 타
계	9,500	1,600	2,400	5,500
2009년	1,105			1,105		3%
2010년	5,871	1,472	2,000	2,399		70%
2010년 08월 ~	2,524	128	400	1,996

○ 세부 시설물 현황

(단위: ㎡)

구 분	면 적	주요 시설물 현황	비고
계	5,317.16
1층	883.41	전시실, 자료정리실, 북카페, 전자정보실
2층	1,023,11	유.아동자료실, 사무실, 세미나실
3층	995.24	종합자료실, 휴게실
4층	892.98	열람실, 동아리실
지하1층	1,522.42	시청각실, 매점, 보존서고, 기전실

꿈여울도서관 건립

○ 오정권역에 지식정보 문화기반 시설인 도서관을 건립하여 균등한 지식 정보서비스 혜택 부여

○ 어린이 수요 중심의 지식정보 및 문화프로그램 제공으로 만족도 향상

□ 사업개요

○ 위    치 : 오정구 작동 67-1

○ 사업기간 : 2004년 ~ 2010년

○ 사업규모 : 부지 1,207㎡ 연면적 3,896㎡

(지하2층, 지상3층)

○ 주요시설 : 어린이자료실, 종합자료실, 시청각실, 문화 강좌실 등

○ 총사업비 : 6,300백만원(도비 2,400 시비 3,900)

□ 추진현황

○ 2007. 12. : 기본 및 실시설계 완료

○ 2008. 07. : 공사 착공

○ 2010. 02. : 공사 준공

○ 2010. 07. : 도서관 개관

□ 사업효과

○ 도서관 정보 서비스 소외지역에 정보문화 향유 및 정서 통합 커뮤니티를 위한 정보문화시설 확충하여 시민 삶의 질 향상

추진부서	시립도서관 운영팀(☎ 032-625-4533)

□ 참고자료

○ 연도별 사업비 집행현황(2010. 07. 30. 현재)

(단위: 백만원)

구 분	사 업 비 집 행 내 역					공정률	비고 (채무)
	계	국 비	도 비	시 비	기 타
계	6,300	-	2,400	3,900	-
2007년	215	-	85	130	-	0%
2008년	2,082	-	1,804	278	-	32%
2009년	2,657	-	511	2,146	-	96%
2010년	1,346	-	-	1,346	-	100%

○ 세부 시설물 현황

(단위: ㎡)

구 분	면 적	주요 시설물 현황	비고
계	5,317.16
1층	598.44	아동자료실, 영어자료실, 유아실, 리딩실
2층	672.96	종합자료실, 사무실
3층	677.43	전자정보실, 문화강좌실, 서고, 시청각실
지하1층	979.08	주차장, 전기실, 발전기실
지하2층	979.08	주차장, 창고

한국만화영상진흥원 건립공사

○ 부천만화정보센터(박물관 및 도서관), PiFan, PISAF 등 문화사업 관련 기관 및 시설의 집적화로 만화․영상산업을 클러스터화 하고

○ 부천영상문화단지를 중심으로 만화영상산업 및 연관 산업의 파급효과를 통해 지역경제 활성화와 문화산업의 국제 경제력을 강화

□ 사업개요

○ 위    치 : 원미구 상동 529-2번지(부천영상문화단지 內)

○ 사업기간 : 2003. 9. ~ 2010. 3.

○ 사업규모 : 부지 26,541㎡(8,028평)/ 건축연면적 23,762㎡(7,188평)

※ 만화비지니스센터(지하 2층~지상 5층)/ 뮤지엄만화규장각(지하 1층~지상 4층)

○ 사 업 비 : 62,800(국비 20,900 도비 12,000, 시비 29,900)

○ 주요시설 : 만화박물관, 만화도서관, 만화작가실, 콘텐츠 기업실 등

□ 추진현황

○ 2004. 03. : 공유재산 관리계획 의결

○ 2004. 06. ~ 09. : 입찰안내서 작성 용역

○ 2005. 12. : 총괄분 공사계약 및 실시설계 착수

○ 2006. 07. : 실시설계 적격 심의

○ 2006. 10. : 건축허가(협의) 및 실시계획 인가

○ 2006. 10. ~ 2008. 12. : 골조, 건축외장, 전기설비 공사 완료

○ 2009. 08. : 공사 준공

○ 2009. 08. ~ 2010. 03. : 입주

□ 사업효과

○ 만화영상산업 집중육성을 위한 종합 인프라 시설확충

○ OSMU시스템 활성화로 만화영상산업의 부가가치 창출

추진부서	문화산업과 만화산업팀(☎032-625-2966)

□ 참고자료

○ 연도별 사업비 집행현황(2010. 07. 30. 현재)

(단위: 백만원)

구 분	사 업 비 집 행 내 역					공정률	비고 (채무)
	계	국 비	도 비	시 비	기 타
계	62,800	29,880	11,994	20,926
2004년	11	5	3	3		-
2005년	15	8	3	4		-
2006년	4,708	2,354	938	1,416		4.9%
2007년	13,686	6,843	2,737	4,106		30.3%
2008년	17,715	8,621	3,733	5,361		67.5%
2009년	22,465	9,828	4,562	8,075		100%
2010년	4,200	2,221	18	1,961		-

○ 세부 시설물 현황

(단위: ㎡)

구 분	층 별	주 요 시 설	면 적(㎡)			전용율	비고
			총면적	전용 면적	공용 면적
총 계			23,762.85	15,217.25	8,525.60
만화비지니스센터	소 계		15,421.06	8,214.74	7,206.32	53.26%
	지하2층	전기실, 발전기실, 기계실, 주차장(78)	3,795.60	1,321.98	2,473.62	34.82%
	지하1층	비즈니스홀, 구내식당, 편의점, 주차장(52)	3,236.46	1,058.21	2,178.25	32.69%
	지상1층	PiFan 사무국, 로비, 통합전산실, 관리실	1,311.07	853.44	457.63	65.09%
	지상2층	창작스튜디오, 아카데미, 만화단체 사무실,	2,141.53	1,558.88	582.65	72.79%
	지상3층	콘텐츠 기업관, PISAF사무국	2,030.21	1,481.13	549.08	72.95%
	지상4층	만화 창작실, 콘텐츠 기업관	1,913.68	1,374.61	539.07	71.83%
	지상5층	재단사무실, 세미나실	992.51	566.49	426.02	57.07%
뮤지엄만화규장각	소 계		8,341.79	7,022.51	1,319.28	84.18%
	지하1층	공조실, 수장고	1,042.51	914.27	128.24	87.69%
	지상1층	상영관, 컨벤션홀, 상품판매관, 카페테리아	2,900.94	2,500.94	400.00	86.21%
	지상2층	만화도서관	2,002.14	1,548.79	453.35	77.35%
	지상3층	만화박물관	1,502.74	1,356.50	146.24	90.26%
	지상4층	만화박물관	893.46	702.01	191.45	78.57%

부천 옹기박물관 건립

○ 조선시대 옹기를 굽던 오정구 여월동(점말)에 옹기를 테마로 박물관을 건립하여 교육․문화․관광자원을 개발하고

○ 타 박물관과의 연계를 통한 문화발전과 지역경제의 활성화에 기여할 수 있는 명소로 개발

□ 사업개요

○ 위    치 : 부천시 오정구 여월동 318번지 외 2필지

○ 사업기간 : 1999. 11. ~ 2011. 10.

○ 사업규모 : 부지 3,381㎡, 건축연면적 2,130.67㎡(지상 2, 지하 1)

○ 주요시설 : 상설전시실, 기증자 특별전시실, 뮤지엄샵, 체험장, 수장고, 다목적실, 움집 및 가마터(실외)

○ 사 업 비 : 8,792백만원(국비 2,100  도비 2,100 시비 4,592)

□ 추진현황

○ 2008. 05. : 공유재산관리계획 승인

○ 2009. 10. : 옹기박물관 건립 기본 및 실시설계 용역 준공

○ 2009. 11. : 도시계획시설 공원(옹기박물관)사업 실시계획 인가 고시

○ 2009. 12. : 공사착공

○ 2010. 04. : 도시계획시설 공원(옹기박물관)사업 실시계획 변경 인가고시

□ 사업효과

○ 선조들의 삶의 애환이 깃든 옹기를 테마로 박물관 및 현장체험학습 공간을 조성하여 부천시의 새로운 문화 공간 창조

○ 서민문화에 대한 체험과 향수의 기회를 확대한 다양하고 내실 있는 박물관을 건립하여 문화도시 위상 강화

추진부서	문화예술과 문화시설팀(☎ 032-625-3120)

□ 참고자료

○ 연도별 사업비 집행현황(2010. 07. 30. 현재)

(단위: 백만원)

구 분	사 업 비 집 행 내 역					공정률	비고 (채무)
	계	국 비	도 비	시 비	기 타
계	8,792	2,100	2,100	4,592	-
2009년	-	-	-	-	-	-
2010년	1,701	500	499	702	-	15%
2010년 08월 ~	7,091	1,600	1,601	3,890	-	-

○ 세부 시설물 현황

(단위: ㎡)

구 분	면 적	주요 시설물 현황	비고
계	2,112.67
1층	787.99	기증전시실,체험실,다목적실,관장실,사무실,자료실
2층	878.37	기획전시실, 상설전시실-1,-2,봉사자실,야외데크
지하1층	446.31	전기실,수장고,해체포장실,저수조,용역대기소

폐기물 전처리시설(MBT)신축

○ 생활폐기물 전처리 후 재활용 가능한 자원을 이용한 재생에너지   (RDF)를 생산하여 자원순환형 폐기물 관리체계를 구축하고

○ 소각장 2개소를 통․폐합하여 운영비 예산 절감 및 환경오염

최소화로 환경 친화적인 도시 조성

□ 사업개요

○ 위    치 : 오정구 대장동 607번지(대장동 종합폐기물처리장 내)

○ 사업기간 : 2007. 05. ~ 2010. 05.

○ 시설규모 : 부지면적 7,800㎡, 건축연면적 3,820㎡

▸MBT 홍보관 별도 : 부지 1,590㎡, 건축면적 460㎡

○ 처리규모 : 생활폐기물 1일 90톤, RDF 생산 1일 55톤

○ 사 업 비 : 15,652백만원(국비 3,510 도비 2,457 시비 9,685)

□ 추진현황

○ 2007. 05. : 공유재산관리계획 시의회 승인

○ 2007. 10. ~ 2008. 03. : 기본계획 및 입찰안내서 작성용역

○ 2008. 06. : 조달청 발주

○ 2008. 12. : 우선시공분 착공

○ 2009. 03. : 기공식

○ 2009. 05. : 실시설계 적격심의 및 본 공사 착공

□ 사업효과

○ 폐기물 전처리시설 도입으로 친환경적 신재생에너지 확보에 따른 국가 경쟁력 제고

추진부서	청소과 청소행정팀(☎ 032-625-3181)

□ 참고자료

○ 연도별 사업비 집행현황(2010. 07. 30. 현재)

(단위: 백만원)

구 분	사 업 비 집 행 내 역					공정률	비고 (채무)
	계	국 비	도 비	시 비	기 타
계	15,652	3,510	2,457	9,685
2007년	67	20	14	33		5%
2008년	108	24	16	68		10%
2009년	4,271	3,295	414	562		80%
2010년	3,915	58	677	3,180		90%
2010년 08월 ~	7,291	113	1,336	5,842

○ 세부 시설물 현황

(단위: ㎡)

구 분	면 적	주요 시설물 현황	비고
	3,798
지하1	303.87	폐기물저장조
지상1	2,259.43	전처리시설, 고형연료저장 및 반출실
지상2	448.73	전기실, 회의실, 사무실
지상3	304.89	중앙제어실, 크레인조정실
홍보동	481.08	홍보실

역곡천 자연형하천 조성공사

○ 하천환경이 열악한 역곡천에 자연친화적인 하천정비사업을 시행하여 시민들에게 친숙하고 쾌적한 생활공간 제공

□ 사업개요

○ 위    치 : 부천시 소사구 옥길동 510-1 ~ 668-49번지

○ 사업기간 : 2008. 05. ~ 2010. 03.

○ 사업규모 : L= 1,418m, B= 25~30m

○ 사업내용 : 교량설치, 배수구조물설치, 환경․휴게시설, 식생대 조성

○ 총사업비 : 14,177백만원(국비 3,253  도비 697 시비10,227)

□ 추진현황

○ 2005. 10. : 실시설계

○ 2006. 04. : 소하천정비 시행계획 승인 및 공고

○ 2007. 12. : 토지 보상

○ 2008. 03. : 하천조성공사 발주

○ 2008. 05. : 공사 착공

○ 2010. 03. : 공사 준공

□ 사업효과

○ 소하천 주변의 침수피해 예방 및 안정적인 주민생활 기반 조성

○ 자연친화적인 수변 생태계 복원 및 수질개선 기여

추진부서	하수과 하수도팀 (☎ 032-625-3422)

□ 참고자료

○ 연도별 사업비 집행현황(2010. 07. 30. 현재)

(단위: 백만원)

구 분	사 업 비 집 행 내 역					공정률	비고 (채무)
	계	국 비	도 비	시 비	기 타
계	14,177	3,253	697	10,227	-
2008년	7,648	1,031	221	6,396		20%
2009년	4,694	2,222	476	1,996		95%
2010년	1,835	-	-	1,835		100%

삼정천처리구역 하수관거 정비공사

○ 삼정천 수계의 하수관거를 체계적으로 정비하여 불명수 유입 차단으로 유입수질 개선을 통한 하수처리시설 운영효율 증대

○ 노후 불량한 하수관거 정비를 통한 상습침수 예방으로 쾌적한 도시환경 조성

□ 사업개요

○ 위    치 : 삼정천처리구역 일원 (신흥동, 오정동, 도당동, 약대동)

○ 사업기간 : 2004. 12. ~ 2009. 10.

○ 사업규모 : L= 52.44km, 빗물펌프장 (20㎥/분×3대) 1개소

○ 사 업 비 : 49,207백만원 (국비 31,742, 도비 957, 시비 16,508)

□ 추진현황

○ 2004. 05. : 실시설계 용역 완료

○ 2004. 09. : 사업발주

○ 2004. 12. : 공사착공

○ 2004. 12. ~ 2009. 10. : 사업시행

○ 2009. 10. : 공사 준공

□ 사업효과

○ 저지대 상습침수 예방을 통한 쾌적한 도시환경 조성

○ 불명수 저감 등 유입수질 개선으로 하수처리시설 운영효율 제고

추진부서	하수과 하수도팀 (☎ 032-625-3421)

□ 참고자료

○ 연도별 사업비 집행현황(2010. 07. 30. 현재)

(단위: 백만원)

구 분	사 업 비 집 행 내 역					공정률	비고 (채무)
	계	국 비	도 비	시 비	기 타
계	49,207	31,742	957	16,508	-
2006년 이 전	23,432	14,277	957	8,198	-	48%
2007년	10,472	6,783	-	3,689	-	69%
2008년	5,679	3,579	-	2,100	-	80%
2009년	9,624	7,103	-	2,521	-	100%

※ 채무내역 : 해당없음

부천수목원 조성

○ 우리시의 협소한 녹지공간을 효율적으로 활용하여 자연학습 및 도시민의 휴게기능이 중심이 된  도시형 수목원 조성

□ 사업개요

○ 위    치 : 원미구 춘의동 산 80번지 일원

○ 사업기간 : 2004. 9. ~ 2012. 6.

○ 사업규모 : 210,298㎡

○ 사업내용 : 무릉도원을 테마 주제원등 1,000종 이상의 수목전시

○ 사 업 비 : 39,345백만원(국비2,980, 도비1,490, 시비 34,875)

□ 추진현황

○ 2004. 12. ~ 2006. 12. : 기본계획 설계용역

○ 2006. 6. : 수목원신규사업사전타당성 심사(산림청)

○ 2007. 9. ~ 2008. 11. : 실시설계 용역

○ 2007. 10. : 재정 투∙융자심사 완료(행자부, 조건부)

○ 2008. 10. : 공유재산관리계획변경승인

○ 2009. 04. : 토지보상 완료

○ 2010. 05. : 개발제한구역 내 입지시설 사전협의(국토해양부)

○ 2010. 07. : 부천수목원조성계획 변경승인

□ 사업효과

○ 자라나는 어린이들이 자연과 더불어 사는 생활의 지혜를 학습하고

○ 시민들에게 자연속의 휴식 공간 확충으로 삶의 질 향상

추진부서	농산지원과 자연학습팀(☎032-625-2802)

□ 참고자료

○ 연도별 사업비 집행현황(2010. 07. 30. 현재)

(단위: 백만원)

구 분	사 업 비 집 행 내 역					공정률	비고 (채무)
	계	국 비	도 비	시 비	기 타
계	39,345	2,980	1,490	34,875
2007년	112	-	-	112		1%
2008년	8,157	108	54	7,995		21%
2009년	15,645	-	-	15,645		60%
2010년	13	-	-	13		60%
2010년 이 후	15,418	2,872	1,436	11,110

○ 세부 시설물 현황

(단위: ㎡)

구 분	면 적	주요 시설물 현황	비고
계	210,298
증식시설	1,031.7	묘포장, 온실
관리시설	151	창고, 연구실
전시시설	13,640	조경시설 및 기반시설
편의시설	14,252.3	화장실, 광장, 내부도로
기타	181,223	원형보전임지, 녹지 등

오정대공원 조성

○ 오정구 지역의 대표적 공원으로 조성하여 시민들에게 쾌적하고 편안한 휴식공간을 제공하여 삶의 질 향상에 기여하고

○ 공원 내 다목적운동장을 건설하여 축제 및 행사 공간 확보로 주민화합 및 지역균형 발전도모

□ 사업개요

○ 위    치 : 오정구 오정동 2-1번지 일원

○ 사업기간 : 2005년 ~ 2009년

○ 사업규모 : 49,400㎡

○ 사업내용 : 잔디광장, 분수, 생태계류시설, 화장실, 다목적운동장 등

○ 총사업비 : 17,500백만원(시비 17,500)

□ 추진현황

○ 2005. 11. : 공원결정 고시

○ 2006. 07. : 공원조성 실시설계용역

○ 2006. 12. : 실시계획인가 고시

○ 2006. 12. ~ 2008. 04. : 감정평가 및 토지보상

○ 2008. 03. : 공사착공

○ 2009. 04. : 공사준공

□ 사업효과

○ 주민휴게시설, 운동시설, 문화시설 등 부족한 공원 인프라를 조성함으로써 지역 균형 발전 및 삶의 질 향상에 기여

추진부서	공원녹지과 공원조성팀(☎ 032-625-3495)

□ 참고자료

○ 연도별 사업비 집행현황(2010. 07. 30. 현재)

(단위: 백만원)

구 분	사 업 비 집 행 내 역					공정률	비고
	계	국 비	도 비	시 비	기 타
계	17,500			17,500		100
2007년	12,378			12,378		70.7
2008년	2,774			2,774		15.8
2009년	2,348			2,348		13.5
2010년

※ 채무내역 : 지방채 80억원(경기도지역개발기금)

○ 세부 시설물 현황

(단위: ㎡)

구 분	면 적	주요 시설물 현황	비고
녹지시설	29,697	소나무등 36종 6,779주
체육시설	10,649	인조잔디구장, 육상트랙, 체력단련시설
편익시설	1,446	공중화장실, 주차장 등
휴양시설	824	팔각정, 파고라, 야외무대 등
교양시설	1식	생태계류
전기시설	1식	공원등, 축구장 조명시설 등

부천시 노인복지시설 건립 추진

○ 2008년부터 시행된 노인장기요양보험법에 대비한 기반시설 확충

○ 중증 노인성질환자의 공공 수발로 의료비 절감 등 사회적 부담 경감

□ 사업개요

○ 위    치 : 부천시 오정구 작동 405번지

○ 시설규모 : 지하1층, 지상5층, 복합건축물

※ 노인전문병원(200병상), 노인전문요양원(100병상), 재가노인지원센터

○ 사업기간 : 2007. 12. ~ 2009. 09.

○ 사 업 비 : 37,647백만원(국비 1,448 도비 1,162 시비 35,037)

□ 추진현황

○ 2007. 02. : 부지매입계약 체결(부천시 ↔ 대한주택공사)

○ 2007. 08. : 수탁법인 결정(의료법인 대인의료재단)

○ 2007. 12. : 공사착공

○ 2009. 09. : 공사준공

○ 2010. 03. : 의료장비, 비품 등 구매

○ 2010. 03. : 시설 운영

□ 사업효과

○ 노인의료복지시설 인프라 구축으로 양질의 서비스 제공

○ 저소득층을 위한 공공의료서비스 제공

추진부서	가정복지과 노인복지팀(☎ 032-625-2927)

□ 참고자료

○ 연도별 사업비 집행현황(2010. 07. 30. 현재)

(단위: 백만원)

구 분	사 업 비 집 행 내 역					공정률	비고 (채무)
	계	국 비	도 비	시 비	기 타
계	37,647	1,448	1,162	35,037
2007년	2,557	41	41	2,475		6.8%
2008년	11,860	1,267	1,000	9,593		31.5%
2009년	19,648	40	20	19,588		52.2%
2010년	3,582	100	101	3,381		9.5%

○ 세부 시설물 현황

(단위: ㎡)

층별	주 요 용 도	병상수	면적 (㎡)	비고
지하1층	- 주차장 - 종교실 및 기계실 등	67대	4,271.94
지상1층	- 주․야간보호시설, 진료실, 원무과 등	30	2,056.38
지상2층	- 단기보호시설 - 재활치료실, 사무실, 대강당	10	1,904.75
지상3층	- 노인전문병원	100	2,142.2
지상4층	- 노인전문병원	100	2,092.67
지상5층	- 노인요양원	100	2,093.4
옥상	- 옥상조경 및 원예치료(농장물재배 등)
합 계			14,561.34

계수대로 개설공사

시흥IC 및 시흥방면(소사로․범박로) 유입교통량을 분산처리 하여 서부수도권의 교통난 해소 및 주변지역 대규모 개발에 따른 지역간 연계도로망 구축

□ 사업개요

○ 위    치 : 소사구 계수동(시흥시계) ~ 범박동(서울시계)

○ 사업기간 : 2002. 10. ~ 2011. 01.

○ 사업규모 : L=6.05㎞(부천 1.63, 시흥 0.45, 서울 3.97), B=30m(6차로)

- 1단계(GB) : 1.055km, 2단계(자연녹지) : 0.575km

○ 사 업 비 : 85,804백만원(국비 42,902 도비 13,085 시비 29,817)

□ 추진현황

○ 2002. 10. ~ 2008. 06. : 1단계(GB구간) 공사 착․준공

○ 2006. 12. : 2단계(자연녹지구간) 실시계획인가

○ 2009. 08. : 2단계 보상완료

○ 2009. 09. : 2단계 공사 착공

□ 사업효과

○ 국도46호선(경인국도)으로 통과하는 시흥방면 교통량의 분산처리 및 서울과 시화․남동공단 산업물동량의 원활한 처리로 국가경쟁력 확보

추진부서	도로과 도로시설팀(☎ 032-625-3884)

□ 참고자료

○ 연도별 사업비 집행현황(2010. 07. 30. 현재)

(단위: 백만원)

구 분	사 업 비 집 행 내 역					공정률	비고 (채무)
	계	국 비	도 비	시 비	기 타
계	85,804	42,902	13,085	29,817
2008년	55,491	24,275	7,827	23,389
2009년	20,631	11,500	3,131	6,000		5%
2010년	2,613	1,924	574	115		27%
2010년 08월 ~	7,069	5,203	1,553	313

서운~삼정간 연결도로 개설공사

인천~부천간 봉오대로와 송내대로(국도39호선)의 교차지점에 평면 접속이 아닌 입체 고가차도 설치로 만성적인 교통체증 해소

□ 사업개요

○ 위    치 : 인천 서운동 ~ 부천시 오정구 삼정동(봉오대로)

○ 사업기간 : 2006. 12. ~ 2011. 08.

○ 사업규모 : L=1.0km(부천 0.54km, 인천 0.46km), B=30m(6차로)

○ 사 업 비 : 21,902백만원(국비 10,951 시비 5,476 기타(인천) 5,475)

□ 추진현황

○ 1986. 09. : 도시계획시설(도로) 결정

○ 2004. 04. : 제2차 수도권 광역도로 지정

○ 2006. 08. : 인천시․부천시 사업협약(사업비 각 50% 부담)

○ 2006. 12. ~ 2008. 11. : 실시설계용역 착․준공

○ 2009. 03. : 공사 착공

□ 사업효과

○ 만성적인 경인고속도로의 대체우회도로 기능 강화

○ 인천북부지역과 부천시의 직접 연결로 지역간 균형발전 도모

추진부서	도로과 도로시설팀(☎ 032-625-3882)

□ 참고자료

○ 연도별 사업비 집행현황(2010. 07. 30. 현재)

(단위: 백만원)

구 분	사 업 비 집 행 내 역					공정률	비고 (채무)
	계	국 비	도 비	시 비	기 타
계	21,902	10,951	-	5,476	5,475	-
2008년	6,659	2,800	-	2,759	1,100	-
2009년	7,270	3,750	-	1,445	2,075	12%
2010년	1,993	1,100	-	318	575	25%
2010년 08월 ~	5,980	3,301	-	954	1,725	-

계남큰길(2단계)확장공사

○ 시가지 균형 발전 및 사통팔달 편리한 교통체계 구축

○ 뉴타운 등 시가지 개발로 증가되는 교통량의 효율적 처리

○ 서울, 인천 등 도시 간 광역도로 사업으로 인근도시 연계성 확보

□ 사업개요

○ 위    치 : 원미구 춘의동 춘의사거리 ~ 춘의동 종합운동장앞

○ 사업기간 : 2006. 07. ~ 2010. 12.

○ 사업규모 : 도로개설 L=1.22㎞ B=30→50m

○ 사 업 비 : 51,551백만원(국비 2,625 도비 8,914 시비 40,012)

□ 추진현황

○ 1986. 11. : 도시계획시설결정

○ 1998. 09. : 설계 용역 준공

○ 1999. 06. : 실시계획 인가

○ 2006. 04. : 보상완료

○ 2006. 07. : 2단계(L=0.96㎞) 공사 착공

○ 2008. 12. : 2단계2구간(L=0.26㎞) 공사 착공

□ 사업효과

○ 인천~중동시가지~서울을 잇는 도로 중 병목구간 도로확장 및 춘의사거리 입체교차로 설치로 효율적인 교통,

○ 주간선 도로로서 지역간 교통소통에 원활기여

추진부서	도로과 도로보수팀(☎ 032-625-3890)

□ 참고자료

○ 연도별 사업비 집행현황(2010. 07. 30. 현재)

(단위: 백만원)

구 분	사 업 비 집 행 내 역					공정률	비고 (채무)
	계	국 비	도 비	시 비	기 타
계	51,551	2,625	8,914	40,012
2006년	37,122	2,625	8,914	25,583		%
2007년						%
2008년						%
2009년	1,250			1,250		%
2010년	2,800			2,800		13.2%
2010년 08월 ~	10,379			10,379

고강동 공영차고지 설치공사

급속한 도시개발로 차고지 확보가 곤란한 업체들에게 주차공간을 제공하여 심야시간대 주택가 주차에 따른 주차 무질서 및 민원문제를 해결하고 교통사고 예방

□ 사업개요

○ 위    치 : 오정구 고강동 2-20번지 일원

○ 사업기간 : 2000. 04. ~ 2010. 12.

○ 사업규모 : 면적29,700㎡(주차면수 195대)

○ 사 업 비 : 18,354백만원(국비 3,078 도비 486 시비 14,790)

□ 추진현황

○ 2000. 04. : 사업추진 기본계획 수립

○ 2004. 08. : 도시계획시설 결정

○ 2004. 12. : 중앙도시계획위원회 안건 심의결과 부결

○ 2005. 04. : 사업재추진 계획 수립

○ 2007. 04. : 경기도지방도시계획위원회 심의

○ 2007. 09. : 중앙도시계획심의위원회 안건상정

○ 2008. 04. : 개발제한구역 관리계획 승인(국토해양부)

○ 2008. 11. : 도시계획시설사업 실시계획인가

○ 2009. 12. : 공사착공

□ 사업효과

○ 시내버스의 부족한 차고지확보 및 대중교통의 간접지원으로 서비스 향상

○ 천연가스 시내버스 도입에 따른 충전소 입지로 대기환경 개선

추진부서	교통관리과 운수팀(☎ 032-625-3833)

□ 참고자료

○ 연도별 사업비 집행현황(2010. 07. 30. 현재)

(단위: 백만원)

구 분	사 업 비 집 행 내 역					공정률	비고 (채무)
	계	국 비	도 비	시 비	기 타
계	18,354	3,078	486	14,790	-
2006년	7	7	-	-
2008년	21	21	-	-
2009년	9,117	3,050	486	5,581			12.15 착 공
2010년	6,349	-	-	6,349		37%
2010년 08월 ~	2,860	-	-	2,860

○ 세부 시설물 현황

(단위: ㎡)

구 분	면 적	주요 시설물 현황	비고
1층	1,598㎡	주차면(195면), 관리동, 정비고, 세차장, 충전소

지하철7호선연장건설사업

○ 중․상동 신도시 개발에 의한 인구유입 및 경인전철 교통포화에 따른 교통난을 해소하고

○ 서울 ~ 부천 ~ 인천을 잇는 수도권 광역교통체제 구축으로 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 위    치 : 서울온수역 ~ 부천 중․상동 ~ 인천 부평구청역

○ 사업기간 : 2004. 12. 30. ~ 2010. 12. 31.

○ 사업규모 : 10.2km(부천:7.39km, 서울:0.44km, 인천:2.37km)

○ 사업내용 : 서울지하철7호선연장(온수역~부천~인천부평구청)

○ 사 업 비 : 1,133,488백만원(국비 60%, 지방비 40%)

※ 부천시 구간 : 782,900백만원(국비 505,040 도비 56,557 시비 221,303)

□ 추진현황

○ 2003. 03. : 건설협약체결(인천․서울․부천시)

○ 2003. 07. ~ 2004. 06. : 기본계획 및 기본설계용역

○ 2004. 06. : 도시철도기본계획 확정 고시(건설교통부)

○ 2004. 12. : 공사착공

○ 2012. 12. : 공사준공 예정

□ 사업효과

○ 포화상태인 경인전철 교통부담 완화

○ 수도권 철도광역화에 따른 서울 접근성 용이 및 지역경제 활성화

추진부서	도시철도과 행정지원팀(☎ 032-625-3923)

□ 참고자료

○ 연도별 사업비 집행현황(부천구간, 2010. 07. 30. 현재)

(단위: 백만원)

구 분	사 업 비 집 행 내 역					공정률	비고 (채무)
	계	국 비	도 비	시 비	기 타
계	612,377	385,508	35,357	191,512	-
2003~ 2007년	166,656	98,075	-	68,581	-	26.6%
2008년	124,248	74,549	-	49,699	-	40.2%
2009년	183,333	110,000	25,357	47,976	-	59.4%
2010년	138,140	102,884	10,000	25,256	-	72.5%
2010년 08월 ~	170,523	119,532	21,200	29,791

○ 세부 시설물 현황

(단위: ㎡)

구 분	면적(㎡)	주요 시설물 현황	비고
751정거장	6,810.02	• 형식 : 지하역사(지하2층), 섬식승강장 • 외부출입구 5개소
752정거장	9,237.34	• 형식 : 지하역사(지하2층), 섬식승강장 • 외부출입구 5개소
753정거장	9,350.35	• 형식 : 지하역사(지하2층), 섬식승강장 • 외부출입구 8개소
754정거장	11,038.50	• 형식 : 지하역사(지하2층), 섬식승강장 • 외부출입구 8개소
755정거장	8,661.65	• 형식 : 지하역사(지하2층), 섬식승강장 • 외부출입구 4개소
756정거장	9,957.46	• 형식 : 지하역사(지하2층), 생대식승강장 • 외부출입구 8개소
현업분소	2,215.29	• 규모 : 지상2층, 지하1층